유해·위험방지계획

1. 안전보건관리계획

가. 산업안전보건관리비 사용계획

산업안전보건관리비 항목별 사용계획 등 산업안전보건관리비 사용계획을

서식(별지 제4호 서식)에 맞게 작성하여 제출한다.

(1) 공사금액은 재료비, 관급재료비, 직접 노무비, 기타 금액을 구분하여 기재한다

(2) 산업안전보건관리비 계상 대상금액에 공사종류 및 규모에 따른 요율을 곱하여 산업안전보건관리비를 산정한다.

※ 단, 관급재료비를 포함한 산업안전보건관리비는 관급재료비를 포함하지 않았을 때의 산업안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없음.

(3) 산업안전보건관리비 대상액이 구분되어 있지 아니한 공사는 도급계약 또는 자체사업계획상의 총 공사금액의 70%를 산업안전보건관리비 계상 대상금액으로 하여 공사종류 및 규모에 따른 요율을 곱하여 산업안전보건관리비를 산정 한다.

(4) 산업안전보건관리비의 세부항목, 단위, 수량, 금액, 산출내역 등을 정확히 파악하여 각 항목별 비용을 산출하고 산출된 비용은 각 항목별 사용기준 비율에 맞추어 조정한 후 항목별 실행계획 및 세부 사용계획을 작성한다.

나. 개인보호구 지급계획

(1) 근로자의 직종, 보호구의 종류, 지급수량, 지급시기 등 전체 공정표에 따라 보호구의 지급계획을 서식(별지 제5호 서식)에 맞게 작성한다

(2) 개인보호구는 성능검정에 합격된 제품을 지급하고 지급된 개인보호구는 근로자가 올바르게 착용할 수 있도록 관리감독 계획을 수립한다.

2. 유해·위험요인별 재해방지계획

가. 추락방지계획

(1) 추락재해 위험 분석

□ 공사단계별 추락위험요인  분석

① 추락위험 요인의 형태, 장소, 크기, 수량 등을 파악하여 목록 작성

- 위험요인 : 수평 개구부, 수직 개구부, 슬래브 단부 등

② 추락위험 요인별 안전대책 제시

□ 추락위험장소를 평면도, 종·횡단면도 등 도면상에 명기

(2) 추락재해방지 대책 수립

□ 추락위험 요인별 안전시설 설치계획 및 상세도 작성

※ 상세도에는 재료 및 설치규격, 설치방법 명시

① 개구부별로 덮개·안전난간·방호울 등 안전시설 설치계획을 명확하게 작성

㉮ 바닥개구부 : P/D, A/D, A/V, P/S, 장비 반입구 등

㉯ 벽면개구부 : 슬래브 단부, 계단실 측면단부, 굴착선단부, 엘리베이터 피트, 카 리프트 등

② 엘리베이터 피트 내부 작업발판 및 추락방지망 설치계획

㉮ 작업발판 설치 상세도(평면도, 종·횡단면도상에 표기)

㉯ 내부 추락방지망을 벽체에 연결하는 방법, 그물코 크기 등 상세계획 작성

③ 각층의 리프트 승강구의 출입문 설치계획

④ 비계, 추락방지망, 틀비계, 달비계, 달대비계, 작업발판 등의 설치 및 사용계획 수립

㉮ 비계 설치계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

㉯ 추락방지망 설치계획

방망의 성능과 설치높이, 설치방법 등에 대한 계획을 수립하고 입면·평면도 작성

㉰ 틀비계 설치계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

㉱ 달비계  설치계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

㉲ 달대비계 설치계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

㉳ 작업발판계획

발판의 재료, 설치방법, 설치간격, 발판고정, 안전난간설치, 작업발판을 이용하는 작업공종 등 상세히 작성

⑤ 가설 경사로, 가설 통로 등 안전통로 설치계획 작성

설치위치, 안전난간 및 미끄럼방지시설 등 안전시설 설치계획 작성

⑥ 이동식사다리 설치 및 사용계획 작성

전도방지조치, 설치방법 등 명기

⑦ 기타 추락위험 요인에 대한 방호조치계획

□ 추락위험공사 안전시설 설치계획 및 상세도

① 굴착공사시 추락방지계획 작성

㉮ 굴착 선단부 안전난간 등 안전시설 설치계획

㉯ 굴착저면까지의 안전통로 설치계획

㉰ 버팀보·띠장위의 점검통로, 이동통로 설치계획 등

(안전대 부착설비계획 등)

② 철골작업시 수직 및 수평통로 설치 계획

㉮ 승강용 트랩, 수직이동용 안전대 부착설비 설치계획(위치, 방법 등)

㉯ 수평이동용 안전대 부착설비 설치계획(재료, 방법 등)

③ 철골작업시 작업발판 설치계획

㉮ 보 및 기둥접합부 작업시 달대비계 설치계획

㉯ 기둥용접 작업시 작업발판 설치계획

(불꽃비산방지막, 방풍막 등 설치계획 포함)

④ 박공(경사)지붕에서의 작업시 추락방호조치계획

작업발판, 안전난간, 안전방망, 안전대 부착설비 등

⑤ 교량공사시 기초 및 교각 안전시설 설치계획

㉮ 교각□Coping 철근조립 및 거푸집 작업중 작업발판

㉯ 가설통로, 추락방지망 설치계획

㉰ Coping상부 단부 추락방지시설 등

⑥ 교량 상부공 안전시설 설치계획

㉮ 상부공 관련 상세도면 제출

㉯ 가설통로, 작업발판, PC 또는 Steel Box Girder 하부 안전방망 설치계획

㉰ Steel Box Girder간 연결통로 및 단부 추락방지시설

㉱ PC 인장작업대 및 추락방지시설

㉲ 슬래브 단부 안전시설

㉳  슬래브 단부 난간정리용 Cage 및 Cantilever Bracket 및 Steel Box Bracket 해체용 작업대 구조 및 안전시설계획

㉴ 거푸집동바리 작업 또는 기타 작업용 특수작업대 구조 및 안전조치계획

⑦ 수상작업 안전대책

㉮ 작업공종 및 작업방법·순서 명기

㉯ 안전시설 설치계획

㉰ 구명조끼 등 안전장구 지급계획

⑧ 기타 추락위험 공사에 대한 방호조치계획

□ 추락위험 예방을 위한 안전조치사항

나. 낙하·비래 예방 계획

(1) 낙하·비래 재해 위험 분석

□ 공사단계별 낙하·비래 위험요인 분석

① 낙하·비래 위험 장소, 형태, 수량 등을 파악하여 목록 작성

- 위험요인 : 작업 중 낙하·비래, 인양작업 중 낙하·비래, 상하동시작업 등

② 낙하·비래 위험 요인별 안전대책 제시

□ 낙하·비래 위험장소를 평면도, 종·횡단면도 등 도면상에 표기

(2) 낙하·비래 재해방지 대책 수립

□ 낙하·비래 위험요인별 안전시설 설치계획 및 상세도

① 낙하물방지망 설치계획 수립

㉮ 설치높이, 설치각도, 방망의 돌출길이 명기

㉯ 벽체와의 사이에 빈틈없이 설치 등 상세히 작성

㉰ 낙하물방지망은 추락방지망 설치계획과 같은 방법으로 작성하되 맨 밑단에는 합판, 함석 등을 이용하여 방호선반 설치

② 방호선반 설치계획 수립

㉮ 지상층 리프트 탑승장소 상부

㉯ 건물 출입구 상부

③ 쓰레기 투하시설 또는 반출계획 등 쓰레기처리 계획을 작성

㉮ 투하시설 설치위치, 투하설비의 종류, 구조체와의 긴결

㉯ 하부 낙하물 비산시설 등

④ 기타 낙하·비래 위험요인에 대한 방호계획

□ 낙하·비래 위험공사 안전시설 설치계획 및 상세도

① 크레인(고정식 또는 이동식)작업시 낙하·비래 방호계획

㉮ 작업반경내 관계자외 출입금지

㉯ 중량물 달기 작업 및 결속방법 준수

-  1점지지 금지, 2개소 이상 지지

- 후크에 해지장치 부착 등

- 인양물이 요동하지 않도록 유도 로프 설치

㉰ 신호수 배치

일정한 신호방법을 정하여 사용

② 거푸집 조립·해체작업 시 낙하·비래 방호계획

작업 중 외부로 자재 등이 낙하·비래되지 않도록 안전작업방법 수립

③ 기타 낙하·비래 위험공사에 대한 방호계획

□ 낙하·비래 위험예방을 위한 안전조치사항

① 낙하·비래 재해의 위험이 있는 상·하 동시작업 금지

철골부재 및 볼트 조립작업, 석재 붙임 작업 등

② 낙하·비래 위험물 제거

비계위에 자재 적재금지 등

다. 붕괴방지계획

(1) 붕괴재해 위험 분석

□ 공사단계별, 붕괴위험요인 분석

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

□ 붕괴 위험장소를 평면도, 종·횡단면도 등 도면상에 표기

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

(2) 붕괴 재해방지대책 수립

□ 붕괴 위험공사별 안전시설 설치계획 및 상세도

① 흙막이지보공의 붕괴방지계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

② 터널공사 붕괴방지계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

③ 거푸집동바리 붕괴방지계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

□ 기타 붕괴 위험예방을 위한 안전조치사항

① 교량공사시 PC Girder 전도방지 대책

전도방지용 철근, 삼각 프레임 설치 등

□ 철근도괴 예방 대책

기초, 옹벽, 교대, 교각 등 다량의 철근이 배근되는 부분의 철근이음위치, 이음방법, 철근배근 작업순서 등 철근도괴 방지계획 작성

라. 차량계 건설기계 및 양중기에 관한 안전작업계획

공사기간 중 사용예정인 차량계 건설기계 및 양중기 작업에 대한 위험요인을 분석하고 이에 대한 구체적인 안전대책을 수립한다.

(1) 차량계 건설기계 및 양중기 작업 분석

□ 공사단계별 위험요인 분석

① 사용기계의 종류, 기간, 수량 등을 파악하여 목록 작성

㉮ 공사중 사용예정인 양중기 현황(종류, 대수 등) 목록 작성

크레인, 리프트, 곤도라 등

㉯ 타워크레인, 리프트 등 양중기 사양서 첨부

정격용량, 각종 안전장치 등이 포함된 내용

㉰ 사용예정인 차량계 건설기계의 종류 및 시기 파악

불도져, 굴삭기, 항타기, 항발기, 로울러, 콘크리트 펌프카 등

□ 타워크레인, 리프트 등의 설치위치 및 작업반경이 표기된 배치도 작성

타워크레인의 작업반경에 따른 허용인양하중 판단표 작성(배치도상에 표기)

(2) 양중기 안전작업 계획 수립

□ 크레인 및 리프트 안전 작업계획

① 타워크레인, 리프트의 기초 설치계획

기초콘크리트 타설 계획, 연약 지반보강계획 등

② 타워크레인, 리프트의 조립·해체 작업순서 및 안전작업방법

㉮ 타워크레인, 리프트의 마스트 지지계획(브라켓, Guy Rope 등)

㉯ 타워크레인의 텔레스코핑(마스트 연장) 작업계획

③ 안전시설 및 안전장치 설치계획

리프트의 지상방호울, 각층 승강구 안전문 등 안전시설 설치계획

④ 사용시 안전관리계획

작업자와 운전자간의 신호방법 수립

리프트 전담운전자 배치계획

□ 곤도라 안전 작업계획

① 곤도라 상부 지지계획

② 곤도라의 작업 안전조치계획

㉮ 안전장치 설치 계획

㉯ 탑승작업시 구명줄 설치계획 등

□ 이동식크레인 사용 안전대책

① 지반 지내력 검토, 부판□철판 설치 등 침하□전도방지조치

② 인양화물에 대한 인양능력 검토

□ 양중기 임대차시 준수 사항

① 대여자의 장비관리 사항

② 대여 받은자의 확인 사항

□ 양중기 완성검사, 정기검사, 자체검사 실시계획

① 검사시기

② 검사항목

③ 검사방법 등을 구체적으로 명기

□ 기타 양중기의 설치·해체·사용작업시 방호계획

(3) 차량계 건설기계 안전 작업계획 수립

□ 차량계 건설기계 안전작업방법

① 작업중 전도·전락 방지계획

노견붕괴방지, 지반 침하방지, 노폭유지 등

□ 차량계 건설기계 사용시 안전조치 계획

① 특고압선 접촉 위험이 있는 경우 접촉 방지계획

② 유도자 배치계획

③ 유도자와 운전자간의 신호방법 수립

□ 기타 차량계 건설기계 작업시 안전조치계획

마. 감전재해 예방계획

건설현장의 가설전기 설치계획을 명시하고 감전재해를 예방하기 위한 위험요인을 분석하여 이에 대한 안전조치 계획과 전기기계·기구에 대한 구체적인 안전대책을 수립한다.

(1) 감전재해 위험요인 분석

□ 임시동력 및 발전기 설치계획

① 임시동력 설치

소요전력 산정 및 설치도

② 발전기 설치

소요전력 산정 및 설치계획

□ 공사단계별 위험요인 파악

공사단계별로 사용예정인 전기 기계·기구 종류, 기간, 수량 등을 파악하여 목록 작성

- 용접기, 철근 가공기, 목재가공용 둥근톱 등

□ 현장내 임시동력 및 배·수전 설비, 분·배전반 등을 포함한 가설전기 회로도 및 배치도 작성

(2) 가설전기 시설 설치 및 안전조치 계획

□ 수·배전 설비 안전조치

① 수·배전반 표준회로도 작성

② 수배전 설비 안전조치 계획

보호울, 위험표지, 시건장치 등 설치계획

□ 분전반 안전조치

① 분전반 회로도 첨부

② 분전반 안전조치계획

㉮ 외함 접지

㉯ 누전차단기 설치

㉰ 시건장치 및 내부 회로도 표기 등

□ 가설전선 안전조치

① 전선의 종류 명시

② 통로, 지하층 등에 전선 거치대 등 전선 보호시설계획

(지중 또는 가공포설)

□ 임시전등(가설 조명등) 안전조치

① 투광등 사용계획 → 삼각대(받침대) 등 이용

② 백열전구 사용시 보호망 부착 등

□ 접지계획

① 리프트, 타워크레인, 분전반 등 고정식 전기 설비의 접지계획

② 핸드드릴, 그라인더 등 이동식 전기기계·기구의 접지형 플러그 사용 등 접지계획 수립

□ 현장주변 특고압선로 현황 및 방호계획

(3) 전기 기계·기구 안전조치 계획

□ 전기기계·기구별 방호조치계획수립

□ 전기 기계·기구 사용시 안전조치계획

① 충전부 방호계획

전기기계·기구 또는 전로 등의 충전부 방호계획

② 절연장갑 등 절연용 보호구 사용계획 등

바. 유해·위험 기계·기구 등에 관한 재해예방계획

산업안전보건법 시행령 별표7에서 정하고 있는 유해·위험기계·기구 사용에 관한 위험요인을 분석하고 기계·기구별 방호조치계획을 수립한다.

(1) 유해·위험 기계·기구 위험요인 분석

□ 유해·위험 기계·기구 사용계획

사용예정인 유해·위험 기계기구 종류, 기간, 수량 등을 파악하여 목록 작성

- 목공용 둥근톱, 교류아크용접기, 핸드그라인더 등

□ 가설기자재 사용계획

사용예정인 가설기자재 종류, 수량 등을 파악하여 목록 작성

(2) 유해·위험 기계·기구 방호조치 계획

□ 교류아아크 용접기에 대한 방호조치 계획

① 자동전격방지기 부착

② 전기 입·출력 단자는 절연테이핑 처리

③ 용접 홀더의 절연체 파손 여부 점검

□ 목재 가공용 둥근톱에 대한 방호조치 계획

① 반발예방장치 및 날접촉예방장치 등 안전장치 부착

② 전기 입·출력 단자 안전조치

□ 연삭기에 대한 방호조치 계획

- 덮개 등 안전장치 부착

□ 기타 유해·위험기계·기구 사용작업시 재해예방 계획

(3) 가설기자재의 방호조치 계획

□ 가설기자재 구입 및 반입계획

○ 가설기자재는 성능검정제품 사용

- 파이프써포트, 보조지주, 강관틀 비계용 부재(주틀, 교차가새, 띠장틀), 작업대, 선반지주, 단관비계용 강관, 외줄비계용 작업대 및 그 지지철물, 이동식비계용의 주틀 및 각륜, 벽연결용 철물, 연결철물(강관틀 비계용 주틀의 연결핀, 강관틀비계용 주틀의 암록, 단관비계용의 단관 조인트), 크램프, 받침철물(고정형, 조절형), 달비계용 부재(달기체인, 달기틀), 수직보호망, 이동식비계용 난간틀, 방호선반, 리프트승강구 안전문, 엘리베이터 개구부용 난간틀, 안전난간지주, 통로용 작업발판, 철골용 크램프, 측벽용 브라켓, 안전방망, 피벗형 받침철물 등 30종

□ 가설기자재 사용 및 관리계획