본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

시  공  계  획  서

(의정부시 가로등 유지보수공사 : 단가)

Ⅰ. 일반적인 사항

1) □갑□은 가로등 유지보수 사유가 발생하였을 때에는 □을□ 에게 통보하고 □을□은 특별한 사유가 없는 한 30분이내 현장도착, 1시간이내에 응급조치를 하여야 하며, 12시간 이내에 이를 수리하여야 하며, 야간 및 공휴일에도 같다.

2) □을□은 수리내역에 관한 사항을 수리완료 즉시 전화 및 구두로 □갑□에게 통보하여야 하며 수리사항을 작업일지에 기록하여  □갑□의 확인을 받아야 한다.(경찰서확인 포함)

3) □을□은 항상 □갑□의 지시에 따라 보수를 실시하여야 하며 유선전화, 핸드폰 등으로 항시 연락이 유지되도록 하여야 한다. (연락처 변경시 □갑□에게 즉시 통보하여야 한다)

4) □을□은 고장수리에 따른 장비 및 인원을 의정부시 관내에 항시  대기하여야 하며, □을□의  귀책사유(연락두절, 기술부족등)로 인하여 수리가 지연될 시 □갑□은 타업체에 수리를 의뢰할 수 있다.

5) □을□은 특별한 경우를 제외하고 보수하여야 할 시설물의 현황 조사서를 사전에 □갑□에게  제출하여야 하며, □갑□의 지시에 의거 수리하고 현장사진(전,후)을 첨부(각 2매)하여 □갑□에       게 고지하여야 한다.

6) □을□은 작업일지를 비치하고 수리내역에 대하여 작업 종료후   □갑□의 확인을 받아야 한다. (경찰서 확인포함)

7) □을□은 반드시 한국공업규격, 전기및광학장치 규격기준에 적합한 부품을 사용하여 수리하여야 하며, 기준에 적합한 부품을 사용하였다 할지라도 수리 후 발생되는 하자에 대하여 무상으로 즉시 재수리 하여야 한다.

8) □을□은 매월말 보수내역(작업일지사본, 작업사진)을 □갑□에게 제출하여 대금을 청구하고 매월 단위로 정산한다.

Ⅱ. 일반적인 사항

(1) 본 공사의 도급자는 전기 공사의 면허를 소지하여야한다.

(2) 본 공사의 도급자는  공사장비(크레인 3ton)를 소유 또는 임대하여야 한다.

(3) 본 공사는 전기설비기술기준 및 도로조명등KS 규정에의하여 시공또는 유지보수 한다.

(4) 본 공사 중 및 하자보수 기간 중 타 구조물 및 인명등에 피해를 입혔을 때에는 도급자가 모든비용을 부담하여야 하며, 이로인한 모든 책임은 도급자 부담으로 한다.

(5) 본 공사에 사용되는 모든자재는 K.S표시상품을 우선작용하고 K.S표시없는 경우에는 전기용품관련 형식 승인품을 사용한다.

(6) 본 공사에 사용되는 모든 자재는 현장 감독관의 검사를 받아 현장에 반입 시공한다.

(7) 본 공사의 시공 중 매입 또는 은폐로 인하여 시공 후 상태의 확인이 지극히 곤란한 공정은 감독관 입회 하에 시공한다.

(8) 본 공사의 시공중에 설계도서에 누락 또는 생략된 부분에 대하여 그 기능 및 성능상 필요하다고 인정될 경우에 도급자는 감독관 통제를 받고 시행한다.

(9) 본 공사의 보수구역은 긴급사항등 감독관 지시로 변경이 가능하며 도급자는 감독관 통제를 받고 시행한다.

(10) 본 공사의 보수공사 대가지급은 도급자의 청구에 의거분할 지급할 수 있다.

단) 긴급 유지보수발생으로 □갑□의 지시에 의거 타지역 유지보수공사를 완료후 품목별 단가지급은 해당지역 계약단가로 청구한다.

(11) 단가계약 공사 업체에 대하여 계약기간중 관련법규의 규정(특수조건 등)에 따라 제재하는 경우 외에도 다음사항이 발생시에도 제재하여야 한다.

구분	경고	중도해지	비고
작업지시에 불응한 경우 (즉시착공)	2회 발생	3회 발생
작업착수를 지연한 경우 (2시간이상 지체 시)	2회 발생	3회 발생
작업공정 및 현장여건에 따른 인력 보강 및 투입 지연한 경우	2회 발생	3회 발생

(12) 상기 사항에 의거 계약업체가 중도 해지된 경우에는 해당업체를 부정당 업체로 제재 조치하고 새로운 업체 확정시까지 시내 타 단가계약 업체로 하여금 시공토록 할 수 있다.

3. 특별한 사항

- 시공계획제출 -

(1) 현장대리인은 매월 유지보수 시공에 관한 공사 공정예정표 및 세부계획서를 제출하여 감독원의 승인을 얻어 착수하여야 한다.

- 가로등 보수공사 관리-

□ 가로등 보수 및 점검사항등을 작업구간에 안내문구(작업차량 및 프랑카드등을 이용)로     시민에 홍보하여야 한다.

(1) 케이블 및 전선관은 규격제품을 사용한다.

(2) Pole (등주) 설치시 접지는 개별 3종 접지공사를 하여야 한다.

(3) 전선관 공사

가) 내부에 이물질 등이 들어가지 않도록 시공한다.

나) 관의 굵기는 케이블의 피복을 포함한 단면적의 총화가 관의 내부 단면적의 40%를 초과하지 못한다.

다) 관의 취급, 접속, 작업순서 및 접속 방법 등의 주의사항이 포함된 안내서를 공사 감독원에게 제출하여 사전승인을 득 하여야한다.

라) 지중에 매설되는 관로의 깊이는 1.2m 이상으로 한다.

(4) 배선공사

가) 전선 및 케이블의 직접접속은 절대불가하며, 단 직접접속을 피할수없을 경우는 감독관으로부터 승인을 얻어 식별한다.

나) 3상 4선식 인입 전원은 아래와 같이 식별한다.

- R상 검정색 ,S상 빨강, T상 청색, 중성선 백색

다) 3상4선식 인입 전원 선로분기는 아래와 같이 식별한다.

- A회로: 검정과 백색       - B회로: 빨강과 백색

- C회로: 청색과 백색       - 접지선: 녹색

(5) 접지공사

가) 접지종별 : 접지종별 및 접지 공작물은 전기설비 기술 기준령 및 내선규정에 준하여 기타사항은 설계도서에 준한다. (각 기기별 제3종 접지)

나) 접지동봉 (14□□1000mm이상)을 개소당 1개 사용하되 규정값에 미달될 경우 접지극을 보강하여 극 상호간의 2m이상 유지한다.

- 가로등주 : 각 개소당 1본 독립접지

- 조작함 : 각 개소당 3본 연접접지

(6) 도급자는 보수자재에 대한 수불부를 만들어 감독관의 통제를 받는다.

(7) 램프 교체시 더러워진 글러브는 세척하여 설치한다.

(8) 가로등은 주민의 야간생활 및 차량통행불편 해소등 주민을 위한 시설임을 감안하고 작업도중 주민에게 친절히 하며 부득이한 경우 지체 없이 감독관에게 연락하여 민원이 발생되지 않도록 성실한 자세로 작업에 임한다.

(9) 도급자는 가로등 긴급사항 발생시, 항시(1시간이내) 출동하여 처리가 될 수 있도록 비상 연락망 체계를 수립하여 감독관에게 제출하고, (야간 및 공휴일 출동시도 이를 적용한다)

(10) 작업지시는 유선 또는 구두로 하며, 48시간(2일) 이내에 작업을 완료 하여야하고 별도의 민원접수일지를 작성 보관한다. 단) 지중선로 단선등 부득이한 경우를 제외하고는 보수공사 작업시 별도의 비상체계로 전환 또는 조치( 가공선로 포설등)한후 작업에  임하여야 한다.

(11) 작업완료 보고는 매일 제출한다.

-환경관리 대책-

(1) 공사 중 보행인 과 차량소통의 불편을 최소화하도록 한다.

(2) 공사현장에서 발생한 부산물은 즉시 처리하여 도시환경 및 보행 및 차량통행에 불편이 없도록 한다. 단) 폐기물관리법에 따라서 처리한다.

(3) 철거자재는 감독관이 지시한 장소에 별도로 반납하여야 한다.

□ 철거자재는 감독관의 확인절차 후 처리한다.

-안전관리 대책-

(1) 작업자는 차량통행 및 보행자를 주시하면서 작업하여야 하며 작업공간을 충분하게 확보하여 작업에 지장이 없도록 하여야 한다.

(2) 가로등 유지보수작업 시 최소2인 1조로 작업을 하여 안전사고가 발생되지 않도록 관리 책임을 철저히 하여야 한다.

(3) 기타 공사 중 특별한 사항은 감독관과 협의하여 시행한다.

(4) 분전함 교체. 선로교체등 전기에 의한 감전사고우려가 있는 공정은 완료후 한국전기안전공사의 안전점검을 필하고 확인증을 교부 받아 제출한다.

단) 재검시 수수료는 도급자 부담으로 한다.

-자재관리 대책-

1) 공사에 사용할 모든재료는 제반 시방서 규정 및 한국산업 규격(K.S)에 부합되는 품질의 종류이어야 하고 감독관의 승인을 받은 것이어야 한다.

2) 시방서 및 기타규정에 맞지 않는 모든재료는 공사에 사용하여서는 안되면 부적합한 재료는 즉시 수급자 부담으로 공사현장에서 반출시켜야 한다.

3) 각종 품질관리시험을 한국산업관리규격(K.S) 및 품질관리 기준, 검사기준 의거 시행하여야하며 추후 시험결과를 감독관이 제출 요구시 제출한다.

-사고처리 대책-

1).□을□은 □갑□으로부터 의뢰 받은 각종작업 이행시 고의 및 과실로 발생  하는 모든 사고에 대하여 민.형사상의 책임을 지며, 수리의 지연 및 미 이행으로 인한 각종사고(교통사고 포함)에 대하여도 책임을 면할수 없다.

- 작업구간 -

1). 중량천변 양안을 기준으로 동서로 구분되며, 등주가 중첩되는 부분은 제어함이 설치된 지역이 우선한다.

2). □갑□은 교통사고에 의한 긴급 유지보수 작업 발생시 와 본공사 도급자 □을□ 업체가  유지  보수업무을 수행중에 있어  본 공사시방서 제1호 일반적인사항Ⅰ의 제1항을 이행하기 어렵다는 갑□의 판단 과  일반적인사항Ⅰ의 제4항 일때도 위 1)항의 작업구간 기준에 관계없이  타구역 □을□ 업체에게  작업을 지시할 수 있다.